КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: данный документ утвержден Постановлением Госстроя РФ от 9 июня 2003 года, а не от 9 июля 2003 года.

Утверждены
Постановлением Госстроя РФ
от 09 июля 2003 г. N 56

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНмр 81-03-41-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНмр-2001

СБОРНИК N 41

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ

(в ред. Изменений и дополнений
к Государственным элементным сметным нормам
на монтаж оборудования. Выпуск 1,
утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 42)

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНмр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах и механизмах) при выполнении работ по капитальному ремонту и модернизации оборудования лифтов и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСНмр являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, а также укрупненных сметных норм и расценок.
Разработаны ФГУП Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России (Ж.Г. Чернышова, Л.В. Размадзе), ЗАО "Русьлифт" (В.А. Тишин, Д.А. Дьяченко), ООО "Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве" (А.Н. Жуков), при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо).
Рассмотрены Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, Т.Л. Грищенкова).
Внесены Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: данный документ введен в действие с 16 июня 2003 года, а с 16 июля 2003 года.

Утверждены и введены в действие с 16 июля 2003 года Постановлением Госстроя России от 09 июля 2003 г. N 56.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНмр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда, строительных машинах и механизмах) при выполнении работ по капитальному ремонту и модернизации оборудования лифтов и составления смет на указанные работы ресурсным методом. ГЭСНмр являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, а также укрупненных сметных норм и расценок.
1.2. ГЭСНмр отражают среднеотраслевые затраты по принятой технологии и организации работ по капитальному ремонту и модернизации лифтов. ГЭСНмр обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальный ремонт и модернизацию с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для объектов, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНмр носят рекомендательный характер.
1.3. Настоящий сборник распространяется на лифты электрические типовых конструкций отечественного производства и аналогичных конструкций иностранных марок.
1.4. Сборник содержит сметные нормы на работы по замене (отдел 01), установке (отдел 02), ремонту (отдел 03) оборудования, устройств и конструкций лифтов, а также прочие работы в период капитального ремонта и модернизации лифтов (отдел 04).
1.5. Сметными нормами предусмотрен комплекс работ в соответствии с требованиями ГОСТ 22011-95 "Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия", Госгортехнадзора, правил охраны труда при производстве работ, включая все необходимые вспомогательные и сопутствующие работы, в том числе:
- разгрузку с транспортного средства и перемещение (подъем, спуск) оборудования, материалов, инструмента и приспособлений в зону производства работ;
- установку и снятие ручных талей (затраты на эксплуатацию ручных талей учитываются нормой накладных расходов);
- перемещение демонтированного оборудования (подъем, спуск);
- частичное техническое освидетельствование лифтов, проводимое инженерными центрами.
Состав работ, учтенных нормами, приведен в таблицах норм. При этом, мелкие, вспомогательные операции не указываются, но подразумеваются.
1.6. В таблицах сметных норм приводятся:
затраты труда рабочих, в чел.-ч;
средний разряд работы;
затраты по эксплуатации машин и механизмов (в случае их использования), в маш.-ч.
Расход материальных ресурсов сметными нормами не предусмотрен. Затраты на используемые материалы определяются в сметах в соответствии с пп. 2.6 и 2.7.
1.7. Затраты на демонтаж и монтаж лифтов в целом в неперекрытых шахтах следует определять на основе сборника ГЭСНмр 81-03-03-2001 "Подъемно-транспортное оборудование".
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на монтаж оборудования. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 42)

2. Порядок применения сметных норм

2.1. Нормами настоящего сборника учтены конкретные условия производства работ по ремонту и модернизации оборудования лифтов, в том числе: стесненность рабочих мест, выполнение отдельных работ вблизи устройств, находящихся под напряжением и т.п., в связи с чем не допускается применение к нормам каких-либо повышающих коэффициентов на условия производства работ.
2.2. На основании ГЭСНмр определение сметной стоимости осуществляется ресурсным методом в текущем уровне цен.
2.3. Для определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту и модернизации оборудования лифтов рекомендуется применять форму локальной ресурсной сметы, приведенную в Приложении 1 настоящего сборника.
В локальной ресурсной смете показываются:
в графе 2 "Шифр норматива, коды ресурсов" - шифр нормы из таблицы ГЭСНмр и коды соответствующих ресурсов (затрат труда, машин и механизмов);
в графе 3 "Наименование работ и затрат, наименование ресурсов" - наименования работ, оборудования, конструкций, а вслед за каждым наименованием - наименования ресурсов в следующей последовательности: затраты труда рабочих; средний разряд работы; затраты труда рабочих, занятых управлением машин и механизмов; наименования машин, механизмов и механизированного инструмента;
в графе 4 "Единица измерения" - единицы измерения, соответственно, оборудования, конструкций (видов работ) и ресурсов;
в графе 5 "Количество на единицу измерения" - расходы ресурсов на единицу измерения того оборудования, конструкций (видов работ), к которому они относятся;
в графе 6 "Общее количество" - количество оборудования (объем работ), а против наименования соответствующих ресурсов - их количество, подсчитанное как произведение расхода на единицу измерения на объем работ.
2.4. В конце сметы суммируется расход однородных ресурсов (затрат труда, машин и механизмов с одинаковыми кодами).
При суммировании затрат труда рабочих средний разряд работ рассчитывается как средневзвешенный.
2.5. В графах 7 и 8 показывается стоимость ресурсов: в графе 7 - на единицу измерения, в графе 8 - общая.
Сумма средств на оплату труда рабочих рассчитывается исходя из стоимости 1 чел.-ч для соответствующего среднего разряда работ.
В состав стоимости 1 чел.-ч включаются расходы по оплате труда (ФОТ), в том числе компенсационные выплаты, связанные с режимом и условиями труда, а также стимулирующие доплаты и надбавки в соответствии с установленными законодательными, нормативными и правовыми актами.
(в ред. Изменений и дополнений к Государственным элементным сметным нормам на монтаж оборудования. Выпуск 1, утв. Постановлением Госстроя РФ от 09.03.2004 N 42)
Стоимость эксплуатации машин и механизмов рассчитывается исходя из расценок 1 маш.-ч соответствующих технических средств.
Расценки 1 маш.-ч в текущем уровне цен определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81-3.99).
2.6. Затраты на приобретение запасных частей, деталей оборудования, необходимых для проведения ремонта или замены отдельных конструктивных элементов лифтов, определяются в сметах и при расчетах за выполненные работы на основе их потребности, установленной по технической документации, с учетом сметных цен текущего уровня, включая транспортные и заготовительно-складские расходы.
2.7. Затраты на вспомогательные материалы (протирочные, промывочные, смазочные, электроды и т.п.) определяются дополнительно в размере 3% от исчисленной по смете суммы средств на оплату труда.
2.8. Норма накладных расходов принимается в соответствии с Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве (МДС 81-4.99, МДС 81-5.99).
Норма сметной прибыли принимается в соответствии с Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001).

ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ
И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ

Вводные указания

1. При применении норм на замену привода дверей кабины (41-01-003-01 и 41-01-003-02) не допускается одновременно использовать нормы на замену редуктора и электродвигателя привода дверей кабины (41-01-003-03 и 41-01-003-04).
2. При применении норм на замену дверей шахты (41-01-005-01 и 41-01-005-02) нормы на замену створки дверей шахты (41-01-005-06 и 41-01-005-07) не применяются.
3. Норма 41-01-011-01 применяется в случае замены в целом башмака, а норма 41-01-011-02 - только вкладыша башмака. Одновременно указанные нормы не применяются.

Таблица ГЭСНмр 41-01-001

Замена замка распашной двери шахты

Состав работ:
для нормы 1:
01. Снятие крышки автоматического замка. 02. Маркировка всех проводов, идущих к автоматическому замку. 03. Отсоединение проводов от блок-контакта. 04. Снятие болтов и замка. 05. Установка нового замка. 06. Регулировка зазоров между ригелем и кромками отверстия.
для нормы 2:
01. Снятие ручки неавтоматического замка. 02. Снятие замка. 03. Подготовка нового замка к установке. 04. Установка нового замка и закрепление его винтами. 05. Установка ручки. 06. Регулировка зазоров между засовом и кромками отверстия в притворном стояке двери шахты.

     Измеритель: 1 замок

             Замена замка распашной двери:
41-01-001-01 автоматического
41-01-001-02 неавтоматического

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-01-│41-01- │
│ресурса│                                  │измер.│001-01│001-02 │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│   1   │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│4,63  │6,19   │
│  1.1  │Средний разряд работы             │      │3,4   │3,2    │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-002

Замена оборудования главного привода

Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Отключение и демонтаж старого электродвигателя. 02. Демонтаж и монтаж полумуфты электродвигателя. 03. Установка электродвигателя. 04. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта.
для норм 3, 4:
01. Отключение и демонтаж электродвигателя. 02. Замена полумуфты электродвигателя. 03. Установка и подключение электродвигателя. 04. Проверка работы лифта.
для норм 5, 6:
01. Разборка новой лебедки на укрупненные узлы и подъем их в машинное помещение. 02. Освобождение старой лебедки от нагрузки и ее демонтаж. 03. Сборка и установка новой лебедки. 04. Выверка положения лебедки. 05. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение. 06. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта. 07. Частичное техническое освидетельствование лифта.
для норм 7, 8:
01. Освобождение лебедки от нагрузки. 02. Демонтаж канатоведущего шкива (КВШ), электродвигателя и червячной пары лебедки. 03. Установка новой червячной пары и сборка лебедки. 04. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение. 05. Проверка и регулировка работы лебедки. 06. Частичное техническое освидетельствование лифта.
для норм 9, 10:
01. Освобождение лебедки от нагрузки. 02. Частичная разборка лебедки и демонтаж редуктора. 03. Монтаж нового редуктора и сборка лебедки. 04. Установка лебедки под нагрузку и ее подключение. 05. Проверка и регулировка работы лебедки и лифта.
для норм 11, 12:
01. Освобождение лебедки от нагрузки. 02. Отключение и демонтаж электродвигателя. 03. Замена тормозной полумуфты. 04. Установка и закрепление электродвигателя. 05. Установка лебедки под нагрузку.
для норм 13, 14:
01. Уравновешивание системы "кабина - противовес". 02. Снятие электродвигателя. 03. Разборка тормозного устройства. 04. Сборка тормозного устройства. 05. Установка электродвигателя. 06. Снятие противовеса с упора. 07. Проверка и регулировка точности остановок.
для норм 15, 16:
01. Освобождение лебедки от нагрузки. 02. Демонтаж канатоведущего шкива. 03. Установка канатоведущего шкива. 04. Установка лебедки под нагрузку. 05. Проверка правильности работы и регулировка подвесок кабины и противовеса. 06. Определение тяговой способности КВШ. 07. Частичное техническое освидетельствование лифта.

    Измеритель: шт.

             Замена электродвигателя, количество лифтов в
             подъезде:
41-01-002-01 1
41-01-002-02 2
             Замена полумуфты электродвигателя, количество
             лифтов в подъезде:
41-01-002-03 1
41-01-002-04 2
             Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в
             подъезде:
41-01-002-05 1
41-01-002-06 2
             Замена червячной пары редуктора лифтовой лебедки,
             количество лифтов в подъезде:
41-01-002-07 1
41-01-002-08 2
             Замена редуктора лифтовой лебедки, количество
             лифтов в подъезде:
41-01-002-09 1
41-01-002-10 2
             Замена тормозной полумуфты лифтовой лебедки,
             количество лифтов в подъезде:
41-01-002-11 1
41-01-002-12 2
             Замена тормозного устройства, количество лифтов в
             подъезде:
41-01-002-13 1
41-01-002-14 2
             Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки,
             количество лифтов в подъезде:
41-01-002-15 1
41-01-002-16 2

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │  Ед. │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│002-01│002-02│002-03│002-04│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда рабочих│чел.-ч│26,2  │20,6  │17,7  │16,5  │
│  1.1  │Средний разряд работы│      │4,1   │4,2   │2,9   │2,9   │
│   2   │Затраты труда        │чел.-ч│0,7   │0,7   │-     │-     │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│031854 │Краны манипуляторы   │маш.-ч│0,7   │0,7   │-     │-     │
│       │1 т                  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │  Ед. │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│002-05│002-06│002-07│002-08│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда рабочих│чел.-ч│58,3  │55,3  │46,1  │45,2  │
│  1.1  │Средний разряд работы│      │3,2   │3,2   │4,3   │4,3   │
│   2   │Затраты труда        │чел.-ч│3,6   │3,6   │-     │-     │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│031854 │Краны манипуляторы   │маш.-ч│3,6   │3,6   │-     │-     │
│       │1 т                  │      │      │      │      │      │
│331451 │Перфораторы          │маш.-ч│0,25  │0,25  │-     │-     │
│       │электрические        │      │      │      │      │      │
│330301 │Машины шлифовальные  │маш.-ч│1,15  │1,15  │-     │-     │
│       │электрические        │      │      │      │      │      │
│040502 │Установки для сварки │маш.-ч│1,2   │1,2   │-     │-     │
│       │ручной дуговой       │      │      │      │      │      │
│       │(постоянного тока)   │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│002-09│002-10│002-11│002-12│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда рабочих│чел.-ч│44,6  │39,3  │24,2  │23,4  │
│  1.1  │Средний разряд работы│      │3,5   │3,5   │3,3   │3,4   │
│   2   │Затраты труда        │чел.-ч│0,7   │0,7   │-     │-     │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│031854 │Краны манипуляторы   │маш.-ч│0,7   │0,7   │-     │-     │
│       │1 т                  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│002-13│002-14│002-15│002-16│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда рабочих│чел.-ч│29,5  │28,1  │19,9  │18,0  │
│  1.1  │Средний разряд работы│      │3,9   │4     │3,7   │3,5   │
│   2   │Затраты труда        │чел.-ч│-     │-     │0,55  │0,55  │
│       │машинистов           │      │      │      │      │      │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│031854 │Краны манипуляторы   │маш.-ч│-     │-     │0,55  │0,55  │
│       │1 т                  │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-003

Замена привода дверей кабины лифта

Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Снятие, установка и закрепление привода. 02. Регулировка привода.
для нормы 3:
01. Отключение и демонтаж электродвигателя и установки выключателей. 02. Демонтаж рычага (водила). 03. Демонтаж редуктора и амортизаторов. 04. Установка редуктора и амортизатора. 05. Установка и подключение выключателей и электродвигателя. 06. Проверка работоспособности привода дверей.
для нормы 4:
01. Демонтаж электродвигателя. 02. Монтаж нового электродвигателя. 03. Проверка работоспособности привода дверей.

    Измеритель:   1  привод   (нормы   1,   2);   1   редуктор   (норма   3);
                  1 электродвигатель (норма 4)

             Замена привода дверей кабины, грузоподъемность
             лифта, кг:
41-01-003-01 до 500
41-01-003-02 свыше 500
41-01-003-03 Замена редуктора привода дверей кабины
41-01-003-04 Замена электродвигателя привода дверей кабины

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │    Наименование     │  Ед. │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│003-01│003-02│003-03│003-04│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда рабочих│чел.-ч│6,61  │6,95  │11,6  │7,34  │
│  1.1  │Средний разряд работы│      │3,7   │3,7   │3,4   │4,4   │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-004

Замена купе и порога кабины лифта

Состав работ:
для норм 1, 2, 3, 4:
01. Демонтаж и последующий монтаж. 02. Проверка правильности подключения электроразводки на кабине.
для нормы 5:
01. Демонтаж башмаков и створок дверей кабины. 02. Демонтаж фартучного устройства и порога кабины. 03. Монтаж порога кабины. 04. Установка башмаков и створок дверей кабины. 05. Монтаж фартучного устройства. 06. Проверка работы дверей кабины лифта.

Измеритель: 1 кабина (нормы 1 - 4); 1 порог (норма 5)

             Замена купе кабины лифта грузоподъемностью до
             400 кг:
41-01-004-01 без доработки рамы пола
41-01-004-02 с доработкой рамы пола
             Замена купе кабины лифта грузоподъемностью
             свыше 400 кг:
41-01-004-03 без доработки рамы пола
41-01-004-04 с доработкой рамы пола
41-01-004-05 замена порога кабины лифта

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│004-01│004-02│004-03│004-04│004-05│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда ра- │чел.-ч│70,9  │78,3  │83,7  │92    │17    │
│       │бочих             │      │      │      │      │      │      │
│  1.1  │Средний разряд    │      │3,6   │3,6   │3,6   │3,6   │3,7   │
│       │работы            │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │
│331442 │Лобзики электри-  │маш.-ч│1,15  │1,15  │1,15  │1,15  │-     │
│       │ческие            │      │      │      │      │      │      │
│330201 │Дрели электричес- │маш.-ч│3,8   │3,8   │4,65  │4,65  │-     │
│       │кие               │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-005

Замена дверей и отдельных конструкций дверей
шахты лифта

Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Разборка двери шахты на узлы. 02. Отключение и изоляция электропроводки блокировочных выключателей дверей шахты. 03. Демонтаж створок и верхней балки дверей шахты. 04. Демонтаж порога и стояков дверей шахты. 05. Монтаж верхней балки и стояков дверей шахты. 06. Монтаж порога дверей шахты. 07. Крепление (сварка) дверей шахты к закладным деталям. 08. Регулировка замков дверей шахты.
для норм 3, 4:
01. Отсоединение электропроводки от блокировочных выключателей. 02. Демонтаж башмаков и створок дверей шахты. 03. Демонтаж верхней балки дверей шахты. 04. Монтаж верхней балки дверей шахты. 05. Монтаж створок и башмаков дверей шахты. 06. Проверка вертикальности установки створок, регулировка величины регламентируемых зазоров. 07. Приваривание верхней балки дверей шахты к закладным деталям. 08. Подключение электропроводки к блокировочным выключателям.
для норм 5, 6:
01. Демонтаж башмаков створки дверей шахты. 02. Демонтаж створки дверей шахты. 03. Монтаж створки дверей шахты. 04. Монтаж башмаков створки дверей шахты. 05. Регулировка величины регламентированных зазоров.
для норм 7, 8:
01. Демонтаж створок двери шахты. 02. Демонтаж старого порога двери шахты. 03. Установка нового порога двери шахты. 04. Установка створок двери шахты. 05. Проверка работы лифта.

    Измеритель: 1  дверь   (нормы  1,  2);  1  балка  (нормы 3, 4); 1 створка
                (нормы 5, 6); 1 порог (нормы 7, 8)

             Замена двери шахты, грузоподъемность лифта, кг:
41-01-005-01 до 500
41-01-005-02 свыше 500
             Замена верхней балки двери шахты, грузоподъемность
             лифта, кг:
41-01-005-03 до 500
41-01-005-04 свыше 500
             Замена створки дверей шахты, грузоподъемность
             лифта, кг:
41-01-005-05 до 500
41-01-005-06 свыше 500
             Замена порога двери шахты, грузоподъемность лифта, кг:
41-01-005-07 до 500
41-01-005-08 свыше 500

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │  Ед. │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│005-01│005-02│005-03│005-04│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда рабочих│чел.-ч│31,1  │35,2  │15,8  │18,5  │
│  1.1  │Средний разряд работы│      │3,7   │3,7   │4,3   │4,4   │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│330301 │Машины шлифовальные  │маш.-ч│1,28  │1,28  │0,85  │1,05  │
│       │электрические        │      │      │      │      │      │
│040502 │Установки для сварки │маш.-ч│1,15  │1,15  │1,1   │1,35  │
│       │ручной дуговой       │      │      │      │      │      │
│       │(постоянного тока)   │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │  Ед. │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│005-05│005-06│005-07│005-08│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда рабочих│чел.-ч│10,7  │11,4  │15    │16    │
│  1.1  │Средний разряд работы│      │3,1   │3,1   │3     │3     │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│330201 │Дрели электрические  │маш.-ч│-     │-     │0,23  │0,31  │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-006

Замена станции управления лифта

Состав работ: 01. Демонтаж и установка станции управления. 02. Разметка и сверление отверстий. 03. Проверка работы станции.

Измеритель: 1 станция (нормы 1 - 3); 1 этаж (норма 4)

             Замена станции управления лифта, количество
             этажей - 9, количество лифтов в подъезде:
41-01-006-01 1
41-01-006-02 2, одиночная работа
41-01-006-03 2, парная работа
41-01-006-04 Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или
             менее 9-ти по нормам 1 - 3

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │    Наименование     │  Ед. │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│006-01│006-02│006-03│006-04│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда рабочих│чел.-ч│64,8  │66,4  │71,5  │3,24  │
│  1.1  │Средний разряд работы│      │4,3   │4,3   │4,2   │4,3   │
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ   │      │      │      │      │      │
│330201 │Дрели электрические  │маш.-ч│0,9   │0,9   │0,9   │-     │
│330301 │Машины шлифовальные  │маш.-ч│0,6   │0,6   │0,6   │-     │
│       │электрические        │      │      │      │      │      │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-007

Замена системы управления лифта

Состав работ: 01. Замена станции управления. 02. Замена электропроводки в машинном помещении. 03. Установка устройств безопасности. 04. Замена электрооборудования по шахте. 05. Заземление корпусов электроаппаратов на всех этажах. 06. Замена электрооборудования по кабине. 07. Заземление корпусов электроаппаратов, купе и каркаса кабины. 08. Проверка работы системы управления во всех режимах. 09. Частичное техническое освидетельствование лифта.

Измеритель: система управления (нормы 1 - 5); 1 этаж (норма 6)

                Замена системы управления лифта на 9 этажей, при
                количестве лифтов в подъезде:
41-01-007-01 1, одиночная работа
41-01-007-02 1, частотное регулирование
41-01-007-03 2, одиночная работа
41-01-007-04 2, частотное регулирование
41-01-007-05 2, парная работа
41-01-007-06    Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или
                менее 9-ти по нормам 1 - 5

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│007-01│007-02│007-03│007-04│007-05│007-06│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда ра- │чел.-ч│161   │165   │160   │164   │163   │8,28  │
│       │бочих             │      │      │      │      │      │      │      │
│  1.1  │Средний разряд    │      │3,7   │3,7   │3,7   │3,7   │3,7   │3,5   │
│       │работы            │      │      │      │      │      │      │      │
│   2   │Затраты труда     │чел.-ч│1,1   │1,65  │1,1   │1,65  │1,1   │-     │
│       │машинистов        │      │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │      │
│330301 │Машины шлифоваль- │маш.-ч│0,87  │0,87  │0,87  │0,87  │1,31  │-     │
│       │ные электрические │      │      │      │      │      │      │      │
│330201 │Дрели электричес- │маш.-ч│5,4   │5,6   │5,4   │5,6   │5,6   │0,4   │
│       │кие               │      │      │      │      │      │      │      │
│330804 │Молотки при работе│маш.-ч│3,76  │3,76  │3,76  │3,76  │3,76  │-     │
│       │от передвижных    │      │      │      │      │      │      │      │
│       │компрессорных     │      │      │      │      │      │      │      │
│       │станций: отбойные │      │      │      │      │      │      │      │
│       │пневматические    │      │      │      │      │      │      │      │
│031001 │Автогидроподъемни-│маш.-ч│1,1   │1,65  │1,1   │1,65  │1,1   │-     │
│       │ки, высотой подъе-│      │      │      │      │      │      │      │
│       │ма 12 м           │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-008

Замена выключателей и переключателей

Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Демонтаж старого автоматического выключателя. 02. Подготовка нового автоматического выключателя к установке. 03. Установка автоматического выключателя. 04. Проверка работы автоматического выключателя.
для норм 3, 4:
01. Демонтаж старого переключателя этажного. 02. Подготовка нового переключателя этажного к установке. 03. Установка переключателя этажного. 04. Проверка работы переключателя этажного.
для норм 5, 6:
01. Демонтаж старого переключателя режима работ на панели управления. 02. Подготовка нового переключателя к установке. 03. Установка переключателя. 04. Проверка в работе переключателя режима работ на панели управления.

Измеритель: 1 выключатель (нормы 1, 2); 1 переключатель (нормы 3 - 6)

             Замена выключателя автоматического на панели
             управления:
41-01-008-01 работа лифта одиночная
41-01-008-02 работа лифта парная
             Замена переключателя этажного:
41-01-008-03 работа лифта одиночная
41-01-008-04 работа лифта парная
             Замена переключателя режима работы на панели
             управления:
41-01-008-05 работа лифта одиночная
41-01-008-06 работа лифта парная

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│008-01│008-02│008-03│008-04│008-05│008-06│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда ра- │чел.-ч│4,06  │5,03  │4,43  │5,42  │3,6   │4,59  │
│       │бочих             │      │      │      │      │      │      │      │
│  1.1  │Средний разряд    │      │3,2   │3,3   │3,5   │3,6   │3,3   │3,4   │
│       │работы            │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-009

Замена канатов, стяжки канатов, ограничителя скорости
и натяжного устройства

Состав работ:
для нормы 1:
01. Размотка, отрезка, бандажирование каната. 02. Освобождение лебедки от нагрузки. 03. Замена тягового каната. 04. Установка лебедки под нагрузку. 05. Проверка и регулировка равномерности натяжения каната. 06. Освобождение лебедки от нагрузки. 07. Выверка балансира. 08. Установка лебедки под нагрузку. 09. Частичное техническое освидетельствование лифта.
для нормы 2:
01. Посадка кабины на ловители. 02. Демонтаж устройства контроля слабины тяговых канатов и клиновых обойм. 03. Демонтаж устройства стяжки канатов. 04. Установка устройства стяжки канатов. 05. Снятие кабины с ловителей. 06. Установка устройства контроля слабины тяговых канатов. 07. Посадка кабины на ловители и регулировка ДУСК. 08. Снятие кабины с ловителей. 09. Выравнивание балансирной подвески.
для нормы 3:
01. Демонтаж и монтаж ограничителя скорости. 02. Проверка правильности настройки ограничителя скорости.
для нормы 4:
01. Размотка, отрезка и бандажирование каната. 02. Снятие демонтируемого и монтаж нового каната. 03. Регулировка концевых выключателей. 04. Проверка надежности сцепления каната со шкивом ограничителя скорости.
для нормы 5:
01. Демонтаж и монтаж натяжного устройства. 02. Проверка работы лифта во всех режимах.

    Измеритель: 1  канат   (нормы   1,  4);   1  устройство  (нормы   2,  5);
                1 ограничитель (норма 3)

41-01-009-01 Замена тягового каната
41-01-009-02 Замена устройства стяжки канатов
41-01-009-03 Замена ограничителя скорости
41-01-009-04 Замена каната ограничителя скорости
41-01-009-05 Замена натяжного устройства каната ограничителя
             скорости

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│009-01│009-02│009-03│009-04│009-05│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда     │чел.-ч│27,9  │16    │8,45  │12,4  │7,79  │
│       │рабочих           │      │      │      │      │      │      │
│  1.1  │Средний разряд    │      │4,3   │4,1   │4,1   │3,5   │3,5   │
│       │работы            │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │
│330301 │Машины шлифоваль- │маш.-ч│-     │-     │0,45  │-     │-     │
│       │ные электрические │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-010

Замена электрооборудования в машинном
помещении лифта

Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Демонтаж и монтаж трансформатора. 02. Проверка работы трансформатора.
для норм 3, 4:
01. Демонтаж и монтаж вводного устройства.
для норм 5, 6:
01. Демонтаж и монтаж выпрямителя. 02. Проверка работы выпрямительного устройства.
для норм 7, 8:
01. Демонтаж и монтаж реле времени. 02. Проверка реле времени в работе.
для норм 9, 10, 11:
01. Демонтаж и монтаж контактора. 02. Проверка действия контактора.
для норм 12, 13, 14:
01. Демонтаж и монтаж проходных конденсаторов на вводном устройстве. 02. Проверка работы вводного устройства.

    Измеритель: 1  трансформатор  (нормы  1,  2);  1 устройство (нормы 3 - 6,
                12 - 14); 1 реле (нормы 7, 8); 1 контактор (нормы 9 - 11)

             Замена трансформатора, количество лифтов в
             подъезде:
41-01-010-01 1
41-01-010-02 2
             Замена устройства вводного, количество лифтов в
             подъезде:
41-01-010-03 1
41-01-010-04 2
             Замена устройства выпрямительного:
41-01-010-05 работа лифта одиночная
41-01-010-06 работа лифта парная
             Замена реле времени:
41-01-010-07 работа лифта одиночная
41-01-010-08 работа лифта парная
             Замена контактора или магнитного пускателя станции
             (шкафа) управления, количество лифтов в подъезде:
41-01-010-09 1
41-01-010-10 2, работа лифта одиночная
41-01-010-11 2, работа лифта парная
             Замена конденсаторов проходных на вводном
             устройстве, количество лифтов в подъезде:
41-01-010-12 1
41-01-010-13 2, работа лифта одиночная
41-01-010-14 2, работа лифта парная

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│010-01│010-02│010-03│010-04│010-05│010-06│010-07│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда     │чел.-ч│4,73  │5,41  │5,04  │5,82  │3,42  │4,41  │3,62  │
│       │рабочих           │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  1.1  │Средний разряд    │      │3,2   │3,2   │3,8   │3,8   │3,3   │3,4   │3,3   │
│       │работы            │      │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│010-08│010-09│010-10│010-11│010-12│010-13│010-14│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда     │чел.-ч│4,61  │5,55  │4,87  │5,86  │3,98  │3,39  │4,39  │
│       │рабочих           │      │      │      │      │      │      │      │      │
│  1.1  │Средний разряд    │      │3,4   │3,2   │3,2   │3,3   │3,2   │3,3   │3,4   │
│       │работы            │      │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-011

Замена башмака

Состав работ:
для нормы 1:
01. Установка кабины в зоне нижней остановки. 02. Демонтаж щита под кабиной. 03. Замена башмака. 04. Регулировка положения башмака. 05. Закрепление щита под кабиной. 06. Проверка работы лифта.
для нормы 2:
01. Установка кабины в зоне нижнего этажа. 02. Демонтаж щита под кабиной. 03. Разборка и промывка башмака. 04. Замена вкладыша. 05. Установка и регулировка положения башмака. 06. Закрепление щита под кабиной. 07. Проверка работы лифта.

Измеритель: 1 башмак (норма 1); 1 вкладыш (норма 2)

41-01-011-01 Замена башмака
41-01-011-02 Замена вкладыша башмака

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-01-│41-01- │
│ресурса│                                  │измер.│011-01│011-02 │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│   1   │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│7,94  │12     │
│  1.1  │Средний разряд работы             │      │3,6   │3,5    │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-012

Замена вызывного и приказного аппаратов и
поста "Ревизия"

Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Демонтаж вызывного аппарата. 02. Монтаж вызывного аппарата. 03. Проверка исправности действия.
для нормы 3:
01. Демонтаж приказного аппарата. 02. Монтаж приказного аппарата. 03. Проверка правильности работы приказного аппарата.
для нормы 4:
01. Демонтаж крышки клеммной коробки на крыше кабины. 02. Отсоединение электропроводки поста "Ревизия". 03. Подключение электропроводки поста "Ревизия". 04. Установка и крепление крышки клеммной коробки на крыше кабины. 05. Проверка работы лифта.

Измеритель: 1 аппарат (нормы 1 - 3); 1 пост (норма 4)

             Замена аппарата вызывного:
41-01-012-01 работа лифта одиночная
41-01-012-02 работа лифта парная
41-01-012-03 Замена аппарата приказного, количество лифтов в
             подъезде - 1
41-01-012-04 Замена поста "Ревизия"

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │  Ед. │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│012-01│012-02│012-03│012-04│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда рабочих│чел.-ч│6,77  │7,59  │19,8  │7,48  │
│  1.1  │Средний разряд работы│      │3,7   │3,8   │3,8   │3,8   │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-013

Замена верхней балки противовеса

Состав работ: 01. Установка подставок под противовес. 02. Посадка кабины на ловителя. 03. Демонтаж и монтаж верхней балки противовеса. 04. Снятие кабины с ловителей. 05. Демонтаж подставок. 06. Регулировка положения башмаков балансирной подвески.

Измеритель: 1 балка

             Замена верхней балки противовеса, количество
             лифтов в подъезде:
41-01-013-01 1
41-01-013-02 2

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-01-│41-01- │
│ресурса│                                  │измер.│013-01│013-02 │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│   1   │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│15,9  │14,8   │
│  1.1  │Средний разряд работы             │      │3,7   │3,7    │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-014

Замена балки дверей кабины

Состав работ: 01. Демонтаж привода дверей кабины. 02. Демонтаж башмачков створок дверей кабины. 03. Демонтаж створок дверей кабины. 04. Демонтаж и установка балки дверей кабины. 05. Установка и регулировка створок дверей кабины. 06. Установка и регулировка привода дверей кабины. 07. Регулировка замков балки дверей кабины. 08. Проверка работы привода дверей кабины.

Измеритель: 1 балка

41-01-014-01 Замена балки дверей кабины

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат       │ Ед.  │41-01-│
│ресурса │                                         │измер.│014-01│
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│   1    │Затраты труда рабочих                    │чел.-ч│ 12,5 │
│  1.1   │Средний разряд работы                    │      │ 3,6  │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-015

Замена конечного выключателя, путевого датчика,
индуктивного датчика или контактного датчика

Состав работ: 01. Демонтаж и монтаж индуктивного датчика типа ИКВ или контактного ДПЭ. 02. Проверка работы датчика.

Измеритель: 1 датчик

             Замена конечного выключателя, путевого,
             индуктивного или контактного датчиков:
41-01-015-01 работа лифтов одиночная
41-01-015-02 работа лифтов парная

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-01-│41-01- │
│ресурса│                                  │измер.│015-01│015-02 │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│  1    │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│5,21  │6,2    │
│ 1.1   │Средний разряд работы             │      │3,3   │3,4    │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ
И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

Таблица ГЭСНмр 41-02-001

Выверка, очистка и промывка направляющих кабины
лифта (противовеса)

Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Проверка вертикальности направляющих. 02. Проверка "штихмасса" направляющих. 03. Проверка неплоскостности направляющих. 04. Проверка смещения направляющих в местах стыков. 05. Регулировка положения направляющих. 06. Зачистка стыков направляющих.
для норм 3, 4:
01. Очистка направляющих от смазки и грязи. 02. Промывка направляющих.

    Измеритель: 1  направляющая  длиной  2 м (нормы 1, 3); 2 м высоты подъема
                (нормы 2, 4)

41-02-001-01 Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной
             2 м
41-02-001-02 На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта
             добавлять к норме 1
41-02-001-03 Очистка и промывка направляющих кабины
             (противовеса) длиной 2 м
41-02-001-04 На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта
             добавлять к норме 3

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │    Наименование     │ Ед.  │41-02-│41-02-│41-02-│41-02-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│001-01│001-02│001-03│001-04│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда рабочих│чел.-ч│20,1  │3,12  │6,7   │0,76  │
│  1.1  │Средний разряд работы│      │3,9   │3,9   │3,4   │3,4   │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-02-002

Установка смазывающего устройства

Состав работ: 01. Прочистка и промывка направляющей по всей высоте шахты. 02. Демонтаж, разборка и прочистка башмака. 03. Разметка и выполнение отверстий во вкладыше башмака. 04. Установка и крепление смазывающего устройства на вкладыше башмака. 05. Установка и регулировка положения башмака. 06. Заливка масла в смазывающее устройство.

Измеритель: 1 устройство

41-02-002-01 Установка смазывающего устройства

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат       │ Ед.  │41-02-│
│ресурса │                                         │измер.│002-01│
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│   1    │Затраты труда рабочих                    │чел.-ч│ 6,95 │
│  1.1   │Средний разряд работы                    │      │ 3,5  │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│ 330201 │Дрели электрические                      │маш.-ч│ 0,24 │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-02-003

Установка блока сигнализации (БС)

Состав работ: 01. Установка блока сигнализации. 02. Частичное техническое освидетельствование лифта.

Измеритель: 1 блок (нормы 1, 2); 1 этаж (норма 3)

             Установка блока сигнализации, количество
             этажей - 9:
41-02-003-01 работа лифта одиночная
41-02-003-02 работа лифта парная
41-02-003-03 Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или
             менее 9-ти по нормам 1 - 2

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │41-02-│41-02-│41-02-│
│ресурса │          затрат           │измер.│003-01│003-02│003-03│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1    │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│11,8  │12,8  │0,41  │
│  1.1   │Средний разряд работы      │      │4,5   │4,5   │4,5   │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│ 330201 │Дрели электрические        │маш.-ч│0,2   │0,2   │-     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-02-004

Установка дополнительного устройства контроля слабины
тяговых канатов (ДУСК)

Состав работ: 01. Посадка кабины на ловители. 02. Разметка и выполнение отверстий для крепления ДУСК. 03. Установка и регулировка ДУСК. 04. Снятие кабины с ловителей. 05. Выравнивание балансирной подвески. 06. Внесение соответствующих изменений в паспорт лифта.

Измеритель: 1 устройство

41-02-004-01 Установка дополнительного устройства контроля
             слабины тяговых канатов (ДУСК)

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат       │ Ед.  │41-02-│
│ресурса │                                         │измер.│004-01│
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│   1    │Затраты труда рабочих                    │чел.-ч│ 11,9 │
│  1.1   │Средний разряд работы                    │      │ 4,3  │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│ 330201 │Дрели электрические                      │маш.-ч│ 0,92 │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-02-005

Установка устройства безопасности (типа УБ1, УБМО)

Состав работ: 01. Установка устройства безопасности. 02. Проверка работы устройства безопасности. 03. Частичное техническое освидетельствование лифта.

Измеритель: 1 устройство (нормы 1, 2); 1 этаж (норма 3)

             Установка устройства безопасности, количество
             этажей - 9:
41-02-005-01 работа лифта одиночная
41-02-005-02 работа лифта парная
41-02-005-03 Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или
             менее 9-ти по нормам 1 - 2

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов    │ Ед.  │41-02-│41-02-│41-02-│
│ресурса│          затрат            │измер.│005-01│005-02│005-03│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│  1    │Затраты труда рабочих       │чел.-ч│38,3  │39,3  │2,8   │
│ 1.1   │Средний разряд работы       │      │3,6   │3,6   │3,5   │
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│  3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ          │      │      │      │      │
│330201 │Дрели электрические         │маш.-ч│0,2   │0,2   │-     │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-02-006

Установка фотодатчика реверса

Состав работ: 01. Демонтаж и монтаж створок обрамления дверного проема кабины. 02. Монтаж фотодатчика. 03. Регулировка положения фотодатчика. 04. Проверка работы фотодатчика реверса.

Измеритель: 1 фотодатчик

41-02-006-01 Установка фотодатчика реверса

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат       │ Ед.  │41-02-│
│ресурса │                                         │измер.│006-01│
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│   1    │Затраты труда рабочих                    │чел.-ч│ 25,1 │
│  1.1   │Средний разряд работы                    │      │ 3,8  │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│ 330201 │Дрели электрические                      │маш.-ч│ 0,8  │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-02-007

Установка промежуточного реле, реле времени

Состав работ: 01. Установка реле. 02. Проверка работы реле.

Измеритель: 1 реле

             Установка промежуточного реле, реле времени:
41-02-007-01 работа лифта одиночная
41-02-007-02 работа лифта парная

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов затрат  │ Ед.  │41-02-│41-02- │
│ресурса│                                  │измер.│007-01│007-02 │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│  1    │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│3,44  │4,44   │
│ 1.1   │Средний разряд работы             │      │3,3   │3,4    │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│  3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │       │
│330201 │Дрели электрические               │маш.-ч│0,2   │0,2    │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-02-008

Установка щита с электроаппаратурой на кирпичную
или бетонную стену

Состав работ: 01. Установка щита. 02. Присоединение проводов. 03. Проверка исправности действия, регулировка.

Измеритель: 1 щит

             Установка щита с электроаппаратурой на кирпичной
             или бетонной стене:
41-02-008-01 работа лифта одиночная
41-02-008-02 работа лифта парная

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-02-│41-02- │
│ресурса│                                  │измер.│008-01│008-02 │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│   1   │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│4,9   │5,89   │
│  1.1  │Средний разряд работы             │      │3,2   │3,3    │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│   3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │       │
│331451 │Перфораторы электрические         │маш.-ч│0,68  │0,68   │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-02-009

Установка блока электронного селектора

Состав работ: 01. Разметка места крепления блока. 02. Сверление отверстий под крепеж. 03. Подключение проводов панели управления. 04. Установка блока электронного селектора. 05. Проверка исправности работы лифта. 06. Проверка правильности установки блока в селекторе.

Измеритель: 1 блок

             Установка блока электронного селектора, количество
             лифтов в подъезде:
41-02-009-01 1
41-02-009-02 2, работа лифта одиночная
41-02-009-03 2, работа лифта парная

┌───────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │41-02-│41-02-│41-02- │
│ресурса│          затрат           │измер.│009-01│009-02│009-03 │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│  1    │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│12    │11,6  │12,6   │
│ 1.1   │Средний разряд работы      │      │4,4   │4,4   │4,4    │
├───────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼───────┤
│  3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │       │
│330201 │Дрели электрические        │маш.-ч│0,2   │0,2   │0,2    │
└───────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-02-010

Установка устройства защиты электродвигателя
главного привода

Состав работ: 01. Установка устройства защиты электродвигателя главного привода. 02. Перекоммутация электрической схемы панели управления. 03. Проверка работоспособности устройства защиты электродвигателя главного привода.

Измеритель: 1 устройство

             Установка устройства защиты электродвигателя
             главного привода:
41-02-010-01 работа лифта одиночная
41-02-010-02 работа лифта парная

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-02-│41-02- │
│ресурса│                                  │измер.│010-01│010-02 │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│   1   │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│7,66  │8,65   │
│  1.1  │Средний разряд работы             │      │4,5   │4,5    │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ
И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

Таблица ГЭСНмр 41-03-001

Ремонт замка распашной двери шахты

Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Регулировка провалов и растворов контакта. 02. Проверка и регулировка зазоров. 03. Очистка деталей. 04. Проверка и подтяжка креплений корпуса. 05. Проверка исправности действия замка.
для нормы 3:
01. Проверка состояния замка. 02. Проверка и регулировка зазоров. 03. Очистка деталей. 04. Проверка исправности действия замка.

Измеритель: 1 замок

             Ремонт замка автоматического:
41-03-001-01 работа лифта одиночная
41-03-001-02 работа лифта парная
41-03-001-03 Ремонт замка неавтоматического

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │41-03-│41-03-│41-03-│
│ресурса │          затрат           │измер.│001-01│001-02│001-03│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1    │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│4,95  │5,94  │3,66  │
│  1.1   │Средний разряд работы      │      │3,6   │3,7   │3,3   │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-002

Ремонт верхней балки противовеса

Состав работ: 01. Демонтаж и установка подставок под противовес. 02. Посадка кабины на ловители. 03. Демонтаж и монтаж верхней балки противовеса. 04. Ремонт верхней балки противовеса. 05. Снятие кабины с ловителей. 06. Регулировка положения башмаков балансирной подвески.

Измеритель: 1 балка

             Ремонт верхней балки противовеса, количество
             лифтов в подъезде:
41-03-002-01 1
41-03-002-02 2

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-03-│41-03- │
│ресурса│                                  │измер.│002-01│002-02 │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│  1    │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│17,4  │18,6   │
│ 1.1   │Средний разряд работы             │      │3,8   │3,8    │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-003

Ремонт ограничителя скорости и натяжного устройства
каната ограничителя скорости

Состав работ:
для нормы 1:
01. Демонтаж и монтаж ограничителя скорости. 02. Ремонт ограничителя скорости. 03. Проверка правильности настройки ограничителя скорости.
для нормы 2:
01. Демонтаж натяжного устройства. 02. Ремонт натяжного устройства. 03. Монтаж натяжного устройства. 04. Проверка работы лифта во всех режимах.

Измеритель: 1 ограничитель (норма 1); 1 устройство (норма 2)

41-03-003-01 Ремонт ограничителя скорости
41-03-003-02 Ремонт натяжного устройства каната ограничителя
             скорости

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-03-│41-03- │
│ресурса│                                  │измер.│003-01│003-02 │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│  1    │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│13,2  │13,1   │
│ 1.1   │Средний разряд работы             │      │4,3   │3,5    │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│  3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │       │
│330301 │Машины шлифовальные электрические │маш.-ч│0,45  │-      │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-004

Ремонт электрооборудования в машинном помещении

Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Ремонт вводного устройства. 02. Проверка работы вводного устройства.
для норм 3, 4:
01. Очистка. 02. Проверка и подтяжка креплений. 03. Проверка исправности цепи заземления. 04. Проверка в работе.
для норм 5, 6:
01. Очистка магнитного пускателя. 02. Проверка и регулировка зазоров. 03. Зачистка контактов. 04. Проверка исправности действия.

    Измеритель: 1  устройство  (нормы  1, 2);  1  трансформатор (нормы 3, 4);
                1 контактор (нормы 5, 6)

             Ремонт вводного устройства (ВУ):
41-03-004-01 работа лифта одиночная
41-03-004-02 работа лифта парная
             Ремонт трансформатора:
41-03-004-03 работа лифта одиночная
41-03-004-04 работа лифта парная
             Ремонт контактора или магнитного пускателя станции
             (шкафа) управления:
41-03-004-05 работа лифта одиночная
41-03-004-06 работа лифта парная

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │   Наименование   │ Ед.  │41-03-│41-03-│41-03-│41-03-│41-03-│41-03-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│004-01│004-02│004-03│004-04│004-05│004-06│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1   │Затраты труда     │чел.-ч│5,02  │6,01  │3,66  │4,68  │3,07  │4,07  │
│       │рабочих           │      │      │      │      │      │      │      │
│  1.1  │Средний разряд    │      │3,8   │3,8   │3,7   │3,7   │3,3   │3,4   │
│       │работы            │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-005

Ремонт створки дверей шахты (кабины)

Состав работ: 01. Демонтаж и монтаж башмаков створки дверей шахты. 02. Демонтаж и монтаж створки дверей шахты. 03. Регулировка величины регламентированных зазоров.

Измеритель: 1 створка дверей

             Ремонт створки дверей шахты (кабины),
             грузоподъемность лифта, кг:
41-03-005-01 до 500
41-03-005-02 свыше 500

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-03-│41-03- │
│ресурса│                                  │измер.│005-01│005-02 │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│   1   │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│17,1  │19,4   │
│  1.1  │Средний разряд работы             │      │3,6   │3,7    │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│   3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │       │
│330201 │Дрели электрические               │маш.-ч│1,05  │1,25   │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-006

Ремонт верхней балки дверей шахты

Состав работ: 01. Отсоединение электропроводки от блокировочных выключателей. 02. Демонтаж башмаков, створок и верхней балки. 03. Ремонт верхней балки дверей шахты. 04. Монтаж верхней балки створок и башмаков дверей шахты. 05. Проверка вертикальности установки створок, регулировка величины регламентируемых зазоров. 06. Приваривание верхней балки дверей шахты к закладным деталям. 07. Подключение электропроводки к блокировочным выключателям.

Измеритель: 1 балка

             Ремонт верхней балки дверей шахты, грузоподъемность
             лифта, кг:
41-03-006-01 до 500
41-03-006-02 свыше 500

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-03-│41-03- │
│ресурса│                                  │измер.│006-01│006-02 │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│   1   │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│26,9  │29,6   │
│  1.1  │Средний разряд работы             │      │4,2   │4,2    │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│   3   │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │       │
│330301 │Машины шлифовальные электрические │маш.-ч│1,38  │1,75   │
│040502 │Установки для сварки ручной дуго- │маш.-ч│1,6   │2,2    │
│       │вой (постоянного тока)            │      │      │       │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-007

Ремонт ловителей кабины (противовеса) лифта

Состав работ: 01. Демонтаж щита под кабины лифта. 02. Разборка, сборка, ремонт и испытание ловителей. 03. Установка щита под кабины лифта. 04. Проверка выполнения условий самозатягивания клиньев ловителей.

Измеритель: 1 ловитель

41-03-007-01 Ремонт ловителя кабины (противовеса) лифта

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат       │ Ед.  │41-03-│
│ресурса │                                         │измер.│007-01│
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│   1    │Затраты труда рабочих                    │чел.-ч│ 15,7 │
│  1.1   │Средний разряд работы                    │      │ 4,2  │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-008

Ремонт вызывного и приказного аппаратов

Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Проверка состояния блок-контактов и сигнальных ламп. 02. Очистка аппарата. 03. Подтяжка клеммных соединений. 04. Проверка исправности действия аппарата.
для нормы 3:
01. Демонтаж и монтаж приказного аппарата. 02. Ремонт приказного аппарата. 03. Проверка правильности работы приказного аппарата.

Измеритель: 1 аппарат

             Ремонт аппарата вызывного:
41-03-008-01 работа лифта одиночная
41-03-008-02 работа лифта парная
41-03-008-03 Ремонт аппарата приказного

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │41-03-│41-03-│41-03-│
│ресурса │          затрат           │измер.│008-01│008-02│008-03│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│   1    │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│7,66  │8,65  │22,3  │
│  1.1   │Средний разряд работы      │      │3,7   │3,7   │4     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-009

Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта
(с проверкой и регулировкой грузовзвешивающей системы)

Состав работ: 01. Проверка состояния блок-контакта. 02. Проверка наличия свободного хода штоков. 03. Проверка клеммных соединений проводов. 04. Проверка исправности действия. 05. Ремонт механизма подвижного пола. 06. Установка приспособления для проверки грузовзвешивающей системы кабины лифта. 07. Проверка и регулировка грузовзвешивающей системы кабины лифта.

Измеритель: 1 механизм

             Ремонт механизма подвижного пола кабины лифта (с
             проверкой и регулировкой грузовзвешивающей
             системы):
41-03-009-01 работа лифта одиночная
41-03-009-02 работа лифта парная

┌───────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│ Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-03-│41-03- │
│ресурса│                                  │измер.│009-01│009-02 │
├───────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│   1   │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│7,95  │8,94   │
│  1.1  │Средний разряд работы             │      │3,5   │3,5    │
└───────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┘

ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНмр 41-04-001

Перевод одного из лифтов с групповым управлением
в одиночный режим работы

Состав работ: 01. Отсоединение электропроводки от шкафа управления лифта. 02. Перекоммутация блока сигнализации. 03. Отключение электропроводки от шкафа управления и электродвигателя лебедки. 04. Установка и подключение устройства управления подъемным средством. 05. Демонтаж проводки в шахте лифта. 06. Переключение электропроводки контактов дверей шахты. 07. Демонтаж электропроводки от шкафа управления лифта до блока парной работы. 08. Демонтаж шкафа управления лифта.

Измеритель: 1 лифт

41-04-001-01 Перевод лифта в одиночный режим работы

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат       │ Ед.  │41-04-│
│ресурса │                                         │измер.│001-01│
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│   1    │Затраты труда рабочих                    │чел.-ч│ 25,1 │
│  1.1   │Средний разряд работы                    │      │ 4,9  │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-04-002

Переоборудование лифта в подъемное средство
подмащивания

Состав работ: 01. Установка, закрепление и подключение блока управления подъемным средством. 02. Демонтаж башмаков створок дверей кабины и фартучного устройства. 03. Демонтаж створок дверей кабины. 04. Освобождение крепления раскладок щитов купе кабины. 05. Демонтаж купе кабины и вынос его к месту складирования. 06. Устройство ограждения. 07. Освобождение креплений и снятие части грузов противовеса. 08. Проверка неуравновешенности системы "подъемное средство - противовес". 09. Регулировка и прочистка ловителей. 10. Монтаж фартучного устройства. 11. Проверка выполнения условий самозатягивания клиньев ловителей. 12. Проверка работы блокировочных устройств и устройств безопасности. 13. Оформление акта приемки подъемного средства.

Измеритель: 1 лифт

41-04-002-01 Переоборудование лифта в подъемное средство
             подмащивания

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат       │ Ед.  │41-04-│
│ресурса │                                         │измер.│002-01│
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│   1    │Затраты труда рабочих                    │чел.-ч│ 24,4 │
│        │Затраты труда инженера II категории      │чел.-ч│ 0,5  │
│  1.1   │Средний разряд работы                    │      │  4   │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-04-003

Балансировка системы "кабина - противовес"

Состав работ: 01. Отключение выключателя приямка. 02. Установка динамометра и его подготовка для проведения измерений. 03. Снятие показаний индикатора динамометра. 04. Снятие динамометра. 05. Включение выключателя приямка. 06. Определение необходимого количества грузов противовеса. 07. Укладка грузов в раму противовеса и их крепление.

Измеритель: 1 система

41-04-003-01 Балансировка системы "кабина - противовес"

┌────────┬─────────────────────────────────────────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат       │ Ед.  │41-04-│
│ресурса │                                         │измер.│003-01│
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│   1    │Затраты труда рабочих                    │чел.-ч│ 12,6 │
│        │Затраты труда инженера II категории      │чел.-ч│ 1,8  │
│  1.1   │Средний разряд работы                    │      │ 3,8  │
├────────┼─────────────────────────────────────────┼──────┼──────┤
│   3    │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                       │      │      │
│ 330201 │Дрели электрические                      │маш.-ч│ 0,55 │
└────────┴─────────────────────────────────────────┴──────┴──────┘

Приложение 1

ФОРМА ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ, СОСТАВЛЯЕМОЙ ПРИ
РЕСУРСНОМ МЕТОДЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ

                     ________________________________________
                              (наименование объекта)

                            Локальная ресурсная смета N

            на _________________________________________________________
                     (наименование работ по капитальному ремонту и
                           модернизации оборудования лифтов)

Основание: Спецификация оборудования;
дефектная ведомость и т.п. Сметная стоимость _______ тыс.руб.
                               Средства на оплату труда ____________ тыс.руб.

Составлена в текущих ценах
по состоянию на ____________ 200__г.

N  
пп.	Шифр нор-
матива,  
коды ре- 
сурсов   	Наименование
работ и за- 
трат, наиме-
нование ре- 
сурсов      	Единица
измере-
ния    	Количество  	Сметная стои- 
мость, руб.   	
				на еди-
ницу   
измере-
ния    	общее	на еди- 
ницу из-
мерения 	общая	
1  	2    	3     	4   	5   	6  	7    	8  	

Составил:              _________________________

Проверил:              _________________________