Утверждены и введены в действие
Приказом Минпромэнерго РФ
от 15 ноября 2004 г. N 148

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЭСНмр 81-03-41-2001

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ

ГЭСНмр-2001

ДОПОЛНЕНИЯ К СБОРНИКУ N 41

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЛИФТОВ

ВЫПУСК 1

Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНмр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда рабочих, строительных машинах и механизмах) при выполнении работ по капитальному ремонту и модернизации оборудования лифтов и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСНмр являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, а также укрупненных сметных норм и расценок.
Разработаны ФГУП Центральный научно-исследовательский институт экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России (Ж.Г. Чернышова, О.Б. Кучер), ЗАО "Русьлифт" (В.А. Тишин, Д.А. Дьяченко).
Рассмотрены Федеральным агентством по строительству и ЖКХ (Т.Л. Грищенкова, С.В. Головин, В.В. Ермолаев).
Внесены Федеральным агентством по строительству и ЖКХ.

ОТДЕЛ 01. РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ОБОРУДОВАНИЯ,
УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТОВ

Вводные указания

Вводные указания дополняются пп. 4 и 5 следующего содержания:
4. При использовании норм на замену противовеса (41-01-030-01 и 41-01-030-02) нормы на замену отдельных узлов противовеса (с 41-01-030-03 по 41-01-030-05) не применяются.
5. Нормы на замену блока (41-01-031-01) и на замену подшипников блока (41-01-031-02) одновременно не применяются.

Таблица ГЭСНмр 41-01-016

Замена фотодатчика реверса

Состав работ: 01. Демонтаж и монтаж фотодатчика. 02. Регулировка положения и проверка работы фотодатчика.

    Измеритель: 1 фотодатчик

41-01-016-01   Замена фотодатчика реверса

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-01- │
│ресурса │                                       │ измер.│016-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │21,47  │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │3,6    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-017

Замена тормозного электромагнита

Состав работ: 01. Демонтаж и монтаж тормозного электромагнита. 02. Регулировка тормозного электромагнита и проверка действия тормоза.

    Измеритель: 1 тормозной электромагнит

41-01-017-01   Замена тормозного электромагнита

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-01- │
│ресурса │                                       │ измер.│017-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │9,66   │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │4,3    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-018

Замена преобразователя частоты

Состав работ: 01. Демонтаж и монтаж преобразователя частоты. 02. Проверка точности остановки по этажам.

    Измеритель: 1 преобразователь частоты

41-01-018-01   Замена преобразователя частоты

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-01- │
│ресурса │                                       │ измер.│018-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │3,44   │
│        │Затраты труда инженера I категории     │чел.-ч │10,52  │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │3,1    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-019

Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма

Состав работ: 01. Разборка электродвигателя. 02. Снятие подшипников. 03. Напрессовка подшипников, полумуфты. 04. Сборка и проверка работы электродвигателя.

    Измеритель: 1 электродвигатель

41-01-019-01   Замена подшипников электродвигателя подъемного механизма

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │    Наименование элементов затрат      │  Ед.  │41-01- │
│ресурса │                                       │ измер.│019-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │9      │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │4      │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-020

Замена ограждения шахты

Состав работ:
для нормы 1: 01. Снятие сетки с отгибанием кляммер, вытаскиванием шомполов и свертыванием сетки в рулон. 02. Растягивание сетки, отмеривание и отрезка по размеру, протаскивание шомполов по периметру. 03. Заготовка шомполов. 04. Установка сетки к стоякам, укрепление кляммерами по периметру.
для норм 2 и 3: 01. Снятие листа. 02. Подгонка листа по размеру каркаса шахты. 03. Крепление листа к каркасу.

Измеритель: м2 (норма 1); 1 лист (нормы 2 и 3)

41-01-020-01   Замена сетки ограждения шахты
               Замена стального листа ограждения шахты, площадь, м2:
41-01-020-02   до 1
41-01-020-03   св. 1

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса │         затрат            │измер.│020-01│020-02│020-03│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│1,44  │1,2   │2,2   │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │2,5   │2,5   │2,5   │
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ         │      │      │      │      │
│330201  │Дрели электрические        │маш.-ч│0,15  │0,2   │0,25  │
│330301  │Машины шлифовальные        │маш.-ч│-     │0,2   │0,3   │
│        │электрические              │      │      │      │      │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-021

Замена распашной двери шахты

Состав работ: 01. Снятие распашной двери шахты с петель. 02. Установка распашной двери на петли. 03. Выверка и подгонка стояков.

    Измеритель: 1 дверь

41-01-021-01   Замена распашной двери шахты

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-01- │
│ресурса │                                       │ измер.│021-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │0,84   │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │2,5    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-022

Замена притворных стояков распашной двери шахты

Состав работ: 01. Снятие притворного стояка с портала шахты. 02. Установка нового притворного стояка к порталу шахты.

    Измеритель: 1 стояк

41-01-022-01   Замена притворного стояка

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-01- │
│ресурса │                                       │ измер.│022-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │3,9    │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │3      │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                     │       │       │
│330201  │Дрели электрические                    │маш.-ч │0,4    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-023

Замена направляющих кабины лифта и противовеса

Состав работ: 01. Отворачивание болтов, освобождение направляющих и вынос их из шахты. 02. Установка направляющих и крепление болтами. 03. Выверка направляющих по вертикали и штихмасу. 04. Зачистка стыков.

Измеритель: 1 м направляющих

               Замена направляющих:
41-01-023-01   кабины
41-01-023-02   противовеса

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов затрат  │ Ед.  │41-01-│41-01-│
│ресурса │                                  │измер.│023-01│023-02│
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│3,74  │1,74  │
│1.1     │Средний разряд работы             │      │4     │4     │
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                │      │      │      │
│330201  │Дрели электрические               │маш.-ч│0,4   │0,2   │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-024

Замена металлического каркаса кабины

Состав работ: 01. Разборка каркаса кабины, выноска элементов каркаса из шахты. 02. Монтаж каркаса кабины с креплением всех частей на болтах. 03. Установка механизма ловителей и башмаков. 04. Регулировка зазоров.

    Измеритель: 1 каркас

41-01-024-01   Замена металлического каркаса кабины

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │    Наименование элементов затрат      │  Ед.  │41-01- │
│ресурса │                                       │ измер.│024-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │26,56  │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │5      │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                     │       │       │
│330201  │Дрели электрические                    │маш.-ч │1,5    │
│330301  │Машины шлифовальные электрические      │маш.-ч │0,8    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-025

Выверка балансира кабины

Состав работ: 01. Определение размера укорачивания или удлинения канатов на кабине. 02. Снятие нагрузки с редуктора, ослабление ветви канатов. 03. Перепасовка канатов на балансире с установкой и снятием зажимов. 04. Проверка работы редуктора под нагрузкой.

Измеритель: 1 балансир

               Выверка трехплечевого балансира кабины:
41-01-025-01   со снятием нагрузки
41-01-025-02   без снятия нагрузки
               Выверка четырехплечевого балансира кабины:
41-01-025-03   со снятием нагрузки
41-01-025-04   без снятия нагрузки

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│025-01│025-02│025-03│025-04│
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│6,76  │1,22  │7,24  │1,52  │
│        │рабочих             │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │3     │3     │3     │3     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-026

Замена рамки слабины подъемных канатов

Состав работ: 01. Установка кабины в удобное для работы место. 02. Снятие кронштейна, ограничивающего ход рамки. 03. Демонтаж рамки. 04. Установка новой рамки. 05. Установка кронштейна и регулировка хода рамки. 06. Смазывание шарниров и проверка рамки в работе.

    Измеритель: 1 рамка

41-01-026-01  Замена рамки слабины подъемных канатов

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │    Наименование элементов затрат      │  Ед.  │41-01- │
│ресурса │                                       │ измер.│026-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │3,22   │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │3      │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-027

Замена клиньев ловителей лифта

Состав работ: 01. Снятие клиньев ловителей. 02. Прочистка, смазывание направляющих клиньев. 03. Установка клиньев. 04. Регулировка и испытание.

Измеритель: 1 компл. клиньев

               Замена клиньев ловителей лифта,
               скорость движения кабины, м/с:
41-01-027-01   до 1, мгновенного действия
41-01-027-02   св. 1, плавного торможения

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-01-│41-01-│
│ресурса │                                  │измер.│027-01│027-02│
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│17,6  │15,88 │
│1.1     │Средний разряд работы             │      │3,5   │3,5   │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-028

Замена отводки для лифта с распашными дверями

Состав работ:
для норм 1 и 2: 01. Демонтаж отводки. 02. Установка новой отводки. 03. Присоединение тяги, подключение проводов (норма 2). 04. Регулировка и проверка в работе (норма 2).
для нормы 3: 01. Демонтаж тяги. 02. Установка новой тяги. 03. Регулировка и проверка в работе.

Измеритель: 1 отводка (нормы 1 и 2); 1 тяга (норма 3)

               Замена отводки:
41-01-028-01   комбинированной
41-01-028-02   электромагнитной
41-01-028-03   Замена тяги электромагнитной отводки

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов   │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса │         затрат            │измер.│028-01│028-02│028-03│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│3,64  │3,08  │1,22  │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3     │3     │2,5   │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-029

Замена узлов и деталей раздвижных дверей кабины лифта

Состав работ:
для нормы 1: 01. Выемка башмака. 02. Установка нового башмака.
для нормы 2: 01. Демонтирование изношенной резины. 02. Установка новой резины. 03. Проверка плотности прилегания, крепление прижимной планки.
для нормы 3: 01. Снятие створок дверей шахты и дверей кабины. 02. Демонтаж старого обрамления. 03. Установка нового обрамления. 04. Установка створок дверей шахты и кабины. 05. Выверка зазоров створок двери кабины, проверка работы дверей кабины и дверей шахты.
для нормы 4: 01. Снятие отводки. 02. Установка и закрепление отводки. 03. Выверка и проверка работы отводки.
для нормы 5: 01. Демонтаж правой каретки дверей кабины. 02. Снятие упора и установка нового упора. 03. Монтаж каретки, проверка работы и регулировка.
для нормы 6: 01. Снятие створок дверей кабины. 02. Снятие отводок. 03. Ослабление крепления контрроликов, при необходимости, их снятие. 04. Снятие каната связи створок. 05. Снятие линейки. 06. Установка линейки с роликами. 07. Установка кареток. 08. Навешивание створок дверей кабины. 09. Установка каната связи створок. 10. Установка отводок. 11. Регулировка и проверка работы.

Измеритель: 1 створка двери (нормы 1 и 2); 1 обрамление (норма 3); 1 отводка (норма 4); 1 упор (норма 5); 1 линейка (норма 6).

               Замена:
41-01-029-01   башмаков створки дверей кабины
41-01-029-02   резины притвора створок дверей кабины
41-01-029-03   обрамления дверного проема кабины
41-01-029-04   отводки дверей кабины
41-01-029-05   упора каретки дверей кабины
41-01-029-06   линейки дверей кабины

┌───────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │  Наименование  │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│элементов затрат│измер.│029-01│029-02│029-03│029-04│029-05│029-06│
├───────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда   │чел.-ч│2,28  │2,2   │9,46  │1,9   │4,92  │4,34  │
│       │рабочих         │      │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд  │      │3     │3     │3     │3     │3     │3     │
│       │работы          │      │      │      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-030

Замена противовеса и отдельных узлов противовеса

Состав работ:
для нормы 1 и 2: 01. Отсоединение тяговых канатов. 02. Выемка грузов из каркаса. 03. Снятие башмаков по одной стороне. 04. Выемка каркаса и установка нового каркаса. 05. Укрепление башмаков. 07. Укладка на место грузов. 08. Проверка надежности сборки, закрепление грузов противовеса.
для нормы 3: 01. Удаление шплинта, отвинчивание гайки. 02. Установка пружины и закрепление гайки. 03. Регулировка и проверка действия.
для нормы 4: 01. Снятие и установка ушковых болтов с пружинами.
для нормы 5: 01. Демонтаж креплений грузов противовеса и снятие верхнего груза.

Измеритель: 1 противовес (нормы 1 и 2); 1 пружина (норма 3); 1 болт (норма 4); 1 груз (норма 5)

               Замена противовеса при подвеске:
41-01-030-01   трехканатной
41-01-030-02   четырехканатной
               Замена узлов противовеса:
41-01-030-03   лопнувших пружин канатодержателей
41-01-030-04   ушковых болтов подвески
41-01-030-05   Снятие верхнего груза противовеса

┌───────┬──────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование   │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│ элементов затрат │измер.│030-01│030-02│030-03│030-04│030-05│
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда     │чел.-ч│23    │23,84 │4,24  │6,7   │0,48  │
│       │рабочих           │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд    │      │3,5   │3,5   │3,5   │3,5   │3     │
│       │работы            │      │      │      │      │      │      │
├───────┼──────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│3      │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ│      │      │      │      │      │      │
│330201 │Дрели электричес- │маш.-ч│1     │1,1   │-     │-     │-     │
│       │кие               │      │      │      │      │      │      │
└───────┴──────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-031

Замена блока и подшипников блока натяжного устройства
каната ограничителя скорости

Состав работ:
для нормы 1: 01. Снятие канатов и закрепление их за балки. 02. Снятие блока. 03. Демонтаж вала и подшипников. 04. Установка подшипников и вала. 05. Монтаж и закрепление блока. 06. Установка масленки. 07. Навешивание тяговых канатов.
для нормы 2: 01. Освобождение блока натяжного устройства от каната. 02. Снятие подшипника. 03. Промывка, чистка, установка подшипника. 04. Набивка смазкой. 05. Установка блока. Навеска каната.

Измеритель: 1 блок (норма 1); 2 подшипника (норма 2)

               Замена:
41-01-031-01   блока
41-01-031-02   подшипников блока натяжного устройства каната
               ограничителя скорости

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов затрат  │ Ед.  │41-01-│41-01-│
│ресурса │                                  │измер.│031-01│031-02│
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│5,68  │4,46  │
│1.1     │Средний разряд работы             │      │4     │3     │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-032

Замена блок-контакта ловителей

Состав работ: 01. Снятие крышки, отсоединение проводов и снятие блок-контакта. 02. Установка и крепление блок-контакта. 03. Присоединение проводов. 04. Установка крышки. 05. Проверка действия блок-контакта, регулировка.

    Измеритель: 1 блок-контакт

41-01-032-01   Замена блок-контакта ловителей

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-01- │
│ресурса │                                       │ измер.│032-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │3,3    │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │4      │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-033

Замена электропроводки освещения шахты
и электропроводки по кабине

Состав работ:
для нормы 1: 01. Отключение и подключение светильников. 02. Демонтаж и монтаж электропроводки.
для норм 2 - 4: 01. Снятие электропроводки по кабине. 02. Прокладка электропроводки цепи управления. 03. Разделка и подключение проводов. 04. Проверка в работе.

Измеритель: 1 этаж (норма 1); 1 кабина (нормы 2 - 4)

41-01-033-01   Замена электропроводки освещения шахты
               Замена электропроводки по кабине с дверями:
               раздвижными, грузоподъемность лифта, кг:
41-01-033-02   до 400
41-01-033-03   св. 400
41-01-033-04   распашными

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │  Ед. │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│033-01│033-02│033-03│033-04│
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│2,76  │6,26  │8,04  │3,56  │
│        │рабочих             │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │3     │4     │4     │4     │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-034

Замена силовой электропроводки машинного помещения

Состав работ:
для нормы 1: 01. Отсоединение силовой электропроводки от клемм вводного устройства, шкафа управления, электродвигателя, тормозного электромагнита, блока освещения шахты. 02. Вытаскивание провода электропроводки из труб и сматывание их в бухту.
для нормы 2: 01. Отмеривание проводов и их маркировка. 02. Удаление заглушек, частичная прочистка. 03. Раскатка и проглаживание проводов, присоединение к проволоке. 04. Затягивание проводов в трубы вручную к шкафу управления, вводному устройству, электродвигателю, тормозному электромагниту. 05. Установка втулок.
для нормы 3: 01. Зачистка концов проводов. 02. Закрепление проводов на клеммах.

Измеритель: 1 провод (нормы 1 и 3); 1 м провода (норма 2)

41-01-034-01   Снятие силовой электропроводки машинного помещения
41-01-034-02   Прокладка проводов силовой электропроводки в трубах
41-01-034-03   Подключение проводов электропроводки

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса │           затрат          │измер.│034-01│034-02│034-03│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│0,5   │0,54  │0,3   │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3     │3,2   │3,5   │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-035

Замена электропроводки цепей управления и сигнализации

Состав работ:
для нормы 10: 01. Проглаживание проводов. 02. Соединение проводов в жгут. 03. Бандажирование жгута.
для нормы 11: 01. Установка кронштейнов на крайних этажах. 02. Крепление струны к кронштейнам.
для нормы 12: 01. Подвешивание жгута в шахте. 02. Крепление жгута к струне (тросу).
для нормы 13: 01. Удаление заглушек, частичная прочистка. 02. Раскатка и проглаживание проводов. 03. Присоединение проводов к проволоке. 04. Затягивание проводов в трубы вручную. 05. Установка втулок.
для норм 20 и 21: 01. Зачистка и маркировка проводов. 02. Формирование жгутов, их прокладка и кроссировка. 03. Присоединение к клеммам.
для нормы 22: 01. Опробование лифта на нормальном режиме (пуск лифта от кнопок вызова и приказа).

Измеритель: 1 шкаф (нормы 1, 20, 21); 10 концов (норма 2); 1 блок-контакт (норма 3); 1 аппарат (нормы 4 и 16); 1 переключатель, датчик (норма 5); 1 коробка (нормы 6, 7, 14, 15, 18, 19); 1 этаж (нормы 8 и 12); 1 м (норма 9); 1 погон. метр (нормы 10, 13); 1 струна (норма 11); 1 провод (норма 17); 1 лифт (норма 22)

               Отсоединение проводов от:
41-01-035-01   шкафа управления, количество концов - 80
41-01-035-02   на каждые 10 концов меньше или больше 80 уменьшать
               или добавлять (к норме 1)
41-01-035-03   блок-контакта распашной, раздвижной двери шахты,
               концевого выключателя
41-01-035-04   вызывного аппарата
41-01-035-05   этажного переключателя или датчика селекции
41-01-035-06   центральной распаячной коробки
41-01-035-07   этажной распаячной коробки
41-01-035-08   Снятие электропроводки, проложенной в трубах
41-01-035-09   Заготовка проводов
41-01-035-10   Заготовка жгута (до 10 жил)
41-01-035-11   Установка струны (несущего троса)
               Прокладка жгута электропроводки:
41-01-035-12   по шахте
41-01-035-13   в трубах к шкафу управления
               Подсоединение проводов к:
41-01-035-14   центральной распаячной коробке
41-01-035-15   этажной распаячной коробке
41-01-035-16   электрическим аппаратам, установленным в шахте
               и приямке лифта
41-01-035-17   шкафу управления лифтом
               Прозвонка электропроводки от шкафа управления
               до распаячной коробки:
41-01-035-18   центральной
41-01-035-19   этажной
               Подсоединение проводов цепи управления к шкафу
               управления лифтом с дверями:
41-01-035-20   распашными
41-01-035-21   раздвижными
41-01-035-22   Опробование работы лифта на всех режимах

┌───────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование  │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│элементов затрат│измер.│035-01│035-02│035-03│035-04│035-05│
├───────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда   │чел.-ч│1,8   │0,22  │0,28  │0,46  │0,24  │
│       │рабочих         │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд  │      │3     │3     │3     │3     │3     │
│       │работы          │      │      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │  Наименование  │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│элементов затрат│измер.│035-06│035-07│035-08│035-09│035-10│
├───────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда   │чел.-ч│1,48  │0,54  │1,12  │0,26  │0,44  │
│       │рабочих         │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд  │      │3     │3     │3     │3     │4     │
│       │работы          │      │      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│ Шифр  │  Наименование  │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│элементов затрат│измер.│035-11│035-12│035-13│035-14│035-15│
├───────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда   │чел.-ч│1,8   │0,54  │0,5   │1,74  │0,84  │
│       │рабочих         │      │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд  │      │3,5   │3,5   │3,5   │3,5   │3,5   │
│       │работы          │      │      │      │      │      │      │
└───────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬─────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │    Наименование     │ Ед.  │41-01 │41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│  элементов затрат   │измер.│035-16│035-17│035-18│035-19│
├───────┼─────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда        │чел.-ч│0,64  │0,06  │1,24  │0,6   │
│       │рабочих              │      │      │      │      │      │
│1.1    │Средний разряд работы│      │3,5   │3,5   │3,5   │3,5   │
└───────┴─────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌───────┬────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр │   Наименование элементов   │ Ед.  │41-01-│41-01-│41-01-│
│ресурса│           затрат           │измер.│035-20│035-21│035-22│
├───────┼────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1      │Затраты труда рабочих       │чел.-ч│3,68  │5,83  │0,74  │
│1.1    │Средний разряд работы       │      │3,5   │3,5   │4     │
└───────┴────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-01-036

Замена подвесного кабеля

Состав работ: 01. Отсоединение проводов, сматывание кабеля в бухту. 02. Укрепление кабеля под кабиной и в центре шахты. 03. Разделка концов, подключение и прозвонка.

    Измеритель: 1 кабель

41-01-036-01   Замена подвесного кабеля

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-01- │
│ресурса │                                       │ измер.│036-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │11,34  │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │4      │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

ОТДЕЛ 02. РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ,
УСТРОЙСТВ И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

Таблица ГЭСНмр 41-02-011

Установка подлебедочной рамы

Состав работ: 01. Установка подрамника, приваривание к закладным. 02. Установка новой подлебедочной рамы. 03. Выверка установки рамы по горизонтали и вертикали.

    Измеритель: 1 рама

41-02-011-01   Установка подлебедочной рамы

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-02- │
│ресурса │                                       │ измер.│011-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │3,8    │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │4      │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-02-012

Установка шунтов

Состав работ:
для нормы 1: 01. Установка кабины в удобное для работы место. 02. Установка и закрепление шунта на направляющей. 03. Выверка зазоров.
для нормы 2: 01. Разметка и сверление отверстий. 02. Установка шунта. 03. Выверка зазоров.

Измеритель: 1 шунт

               Установка шунта:
41-02-012-01   точной остановки кабины
41-02-012-02   замедления движения кабины

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов затрат  │ Ед.  │41-02-│41-02-│
│ресурса │                                  │измер.│012-01│012-02│
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих             │чел.-ч│1,2   │6     │
│1.1     │Средний разряд работы             │      │3     │4     │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-02-013

Установка поручня в кабине

Состав работ: 01. Разметка и сверление отверстий. 02. Подгонка, сборка и крепление поручня.

    Измеритель: 1 пог. метр

41-02-013-01   Установка поручня в кабине

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-02- │
│ресурса │                                       │ измер.│011-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │3,93   │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │4      │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│3       │МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ                     │       │       │
│330201  │Дрели электрические                    │маш.-ч │0,3    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

ОТДЕЛ 03. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ
И КОНСТРУКЦИЙ ЛИФТА

Вводные указания

1. При применении нормы на ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки (табл. 41-03-013) норма на ремонт тормозного электромагнита (табл. 41-03-014) не применяется.

Таблица ГЭСНмр 41-03-010

Ремонт редуктора лебедки главного привода

Состав работ: 01. Разборка и сборка лебедки. 02. Ремонт редуктора. 03. Регулировка и проверка работы лебедки и лифта.

    Измеритель: 1 редуктор

41-03-010-01  Ремонт редуктора лебедки главного привода

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-03- │
│ресурса │                                       │ измер.│010-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │35,98  │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │4,2    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-011

Ремонт балки дверей кабины

Состав работ: 01. Демонтаж и монтаж оборудования балки дверей кабины. 02. Ремонт оборудования балки дверей кабины. 03. Регулировка взаимодействия элементов балки дверей кабины. 04. Проверка работы дверей шахты и лифта.

    Измеритель: 1 балка

41-03-011-01  Ремонт балки дверей кабины

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-03- │
│ресурса │                                       │ измер.│011-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │27,52  │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │4,3    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-012

Ремонт привода дверей кабины

Состав работ: 01. Отключение и демонтаж привода дверей. 02. Ремонт привода дверей. 03. Установка и подключение привода дверей. 04. Регулировка положения и проверка работоспособности привода дверей.

    Измеритель: 1 привод дверей

41-03-012-01  Ремонт привода дверей кабины

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-03- │
│ресурса │                                       │ измер.│012-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │20,71  │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │3,9    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-013

Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки

Состав работ: 01. Демонтаж и монтаж электродвигателя. 02. Разборка и сборка тормозного устройства. 03. Ремонт тормозного устройства. 04. Проверка действия тормоза, точности остановок кабины по этажам, регулировка тормозного устройства.

    Измеритель: 1 тормозное устройство

41-03-013-01   Ремонт тормозного устройства лифтовой лебедки

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-03- │
│ресурса │                                       │ измер.│013-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │33,33  │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │4,1    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-014

Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки

Состав работ: 01. Демонтаж и монтаж тормозного электромагнита. 02. Разборка, дефектация составных частей и сборка электромагнита. 03. Регулировка тормозного устройства, проверка действия тормоза, точности остановок кабины лифта на этажах, регулировка тормозного усилия.

    Измеритель: 1 тормозной электромагнит

41-03-014-01   Ремонт тормозного электромагнита лифтовой лебедки

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-03- │
│ресурса │                                       │ измер.│014-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │9,66   │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │4,3    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-015

Ремонт преобразователя частоты
частотно-регулируемого электропривода лифта

Состав работ: 01. Демонтаж и монтаж преобразователя частоты. 02. Ремонт преобразователя частоты. 03. Проверка точности остановки кабины лифта на этажах.

    Измеритель: 1 преобразователь частоты

41-03-015-01   Ремонт преобразователя частоты

┌────────┬───────────────────────────────────────┬───────┬───────┐
│  Шифр  │     Наименование элементов затрат     │  Ед.  │41-03- │
│ресурса │                                       │ измер.│015-01 │
├────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┤
│1       │Затраты труда рабочих                  │чел.-ч │2,79   │
│        │Затраты труда инженера I категории     │чел.-ч │16,7   │
│1.1     │Средний разряд работы                  │       │3,2    │
└────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-016

Ремонт купе кабины лифта

Состав работ:
для нормы 1: 01. Разборка купе кабины. 02. Снятие электропроводки. 03. Снятие потолка, створок дверей, боковых стенок и боковин. 04. Установка потолка кабины с пригонкой и креплением. 05. Установка подвижного пола. 06. Навеска створок дверей. 07. Настилка линолеума на пол кабины. 08. Вставка стекол.
для норм 2 и 3: 01. Снятие электропроводки по кабине. 02. Снятие привода дверей в сборе. 03. Отсоединение потолка от стояков каркаса кабины и временное закрепление канатом к верхней балке каркаса. 04. Снятие щитов купе кабины. 05. Установка щитов и вентиляционных решеток в каркас кабины. 06. Навеска и закрепление к стоякам каркаса потолка кабины. 07. Укрепление купе. 08. Установка привода дверей в сборе. 09. Установка электроаппаратов. 10. Восстановление электропроводки по кабине и подключение электроаппаратов. 11. Проверка работы.

Измеритель: 1 купе

               Ремонт купе кабины, с дверями:
               раздвижными, грузоподъемность лифта, кг:
41-02-016-01   до 400
41-02-016-02   св. 400
41-02-016-03   распашными

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │41-02-│41-02-│41-02-│
│ресурса │         затрат            │измер.│016-01│016-02│016-03│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│34,02 │40,52 │42,12 │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │5     │5     │4     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-017

Ремонт блоков

Состав работ: 01. Снятие канатов из ручьев. 02. Снятие блока. 03. Прочистка и промывка подшипников. 04. Проверка подачи масла в подшипники. 05. Установка и закрепление блока. 06. Навешивание канатов.

Измеритель: 1 блок

               Ремонт блоков со снятием и установкой на баки:
               горизонтальные, масса блока, кг:
41-02-017-01   до 50
41-02-017-02   св. 50
41-02-017-03   вертикальные

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │41-02-│41-02-│41-02-│
│ресурса │         затрат            │измер.│017-01│017-02│017-03│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│5,78  │6,54  │7,76  │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │4     │4     │4     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-03-018

Ремонт станции управления лифтом

Состав работ: 01. Проверка и устранение механических заеданий и магнитных залипаний, зачистка реле и контакторов. 02. Очистка электрооборудования станции от пыли. 03. Проверка и регулировка провалов и растворов всех реле и контакторов. 04. Проверка и регулировка выдержек реле времени. 05. Проверка, при необходимости, замена плавких предохранителей. 06. Проверка и подтяжка клеммных соединений проводов, крепления электроаппаратов. 07. Подача напряжения и проверка работы станции управления во всех режимах с одновременной проверкой выключателей и переключателей. 08. Проверка исправности цепи заземления каркаса станции управления, наличия и соответствия цепи заземления электросхеме лифта.

Измеритель: 1 станция

               Станция управления лифтами:
               релейно-контакторная, скорость движения кабины, м/с:
41-02-018-01   до 1
41-02-018-02   св. 1
41-02-018-03   на микропроцессорных устройствах и микроэлектронике
               (с заменой плат)

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │41-02-│41-02-│41-02-│
│ресурса │         затрат            │измер.│018-01│018-02│018-03│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│12,6  │13,94 │9,6   │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │4     │4     │4     │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

Таблица ГЭСНмр 41-04-04

Передвижение кабины и противовеса ручным способом

Измеритель: м

              Передвижение кабины и противовеса при помощи:
              маховика (штурвала):
41-04-04-01   вверх
41-04-04-02   вниз
              рычага:
41-04-04-03   вверх
41-04-04-04   вниз

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │41-04-│41-04-│41-04-│41-04-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│04-01 │04-02 │04-03 │04-04 │
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│0,44  │0,14  │0,88  │0,28  │
│        │рабочих             │      │      │      │      │      │
│1.1     │Средний разряд      │      │2,5   │2,5   │2,5   │2,5   │
│        │работы              │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

ОТДЕЛ 05. РАБОТЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ДИАГНОСТИРОВАНИЮ
И ОБСЛЕДОВАНИЮ ЛИФТОВ

Вводные указания

1. В настоящем отделе приведены сметные нормы затрат на работы по техническому диагностированию и обследованию лифтов, проводимые специализированными экспертными организациями (инженерными центрами), имеющими лицензию, выданную Госгортехнадзором России.
2. Нормы разработаны в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ) - ПБ 10-558-03, а также методических указаний, руководящих документов и положений Госгортехнадзора России.
3. В нормах на полное техническое освидетельствование лифта (табл. 41-05-001), проводимое после монтажа и пусконаладочных работ до ввода лифта в эксплуатацию учтены затраты на:
- проверку наличия технической и эксплуатационной документации, акта на скрытые работы и протоколов;
- визуальный и измерительный контроль установки лифта, проверку технического состояния оборудования лифта в соответствии с монтажными чертежами и ПБ 10-558-03;
- проверку функционирования лифта на всех режимах в соответствии с Руководством по эксплуатации;
- проведение испытаний;
- составление и оформление акта полного технического освидетельствования лифта по установленной форме согласно ПУБЭЛ.
4. В нормах на периодическое техническое освидетельствование лифта (табл. 41-05-002), проводимое в течение всего срока его эксплуатации не реже одного раза в 12 календарных месяцев, учтены затраты на:
- проверку технической и эксплуатационной документации;
- визуальный и измерительный контроль установки лифтового оборудования, за исключением размеров, не изменяемых в процессе эксплуатации;
- проверку функционирования лифта на всех режимах;
- проведение испытаний;
- проверку соответствия организации эксплуатации лифта ПУБЭЛ;
- составление и оформление акта периодического технического освидетельствования по установленной форме согласно ПУБЭЛ.
5. В нормах на частичное техническое освидетельствование лифта (табл. 41-05-003, 41-05-004), проводимое после ремонта, замены лифтового оборудования или установки дополнительных устройств (модернизации), учтены затраты на:
- проверку технической и эксплуатационной документации;
- проверку соответствия отремонтированного, замененного или вновь установленного оборудования паспортным данным;
- проведение испытаний и (или) проверку отремонтированных, замененных или установленных устройств и оборудования в объеме периодического технического освидетельствования;
- составление и оформление протоколов испытаний.
6. В нормах на техническое диагностирование лифта, отработавшего срок службы, установленный в нормативной конструкторской и эксплуатационной документации, стандартах, правилах безопасности (табл. 41-05-005), учтены затраты на:
- проверку технической и эксплуатационной документации;
- визуальный и измерительный контроль, определение состояния лифтового оборудования с выявлением дефектов, неисправностей, степени износа, коррозии;
- испытание устройств безопасности;
- обследование металлоконструкций с применением неразрушающих методов контроля;
- проверку: сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей; наличия цепи между заземленной электроустановкой и элементами заземленной установки; срабатывания защиты в сетях с глухозаземленной централью;
- проверку функционирования оборудования лифта в различных режимах;
- составление и оформление отчетной документации о результатах испытаний лифта, ведомости дефектов и выявленных отступлений от требований ПУБЭЛ;
- оформление экспертного заключения о возможности продления срока безопасной эксплуатации лифта.
7. При определении по табл. 41-05-005 затрат на техническое диагностирование лифта, отработавшего назначенный срок службы, нормы табл. 41-05-006 и 41-05-007 не применяются.
8. В случае определения затрат на ремонт, замену или дополнительную установку оборудования лифтов по нормам отделов 1 - 3 настоящего Сборника, в которых учтены затраты на частичное техническое освидетельствование лифтов (о чем имеется запись в составе работ по соответствующей таблице сметных норм), нормы таблиц 41-05-003 и 41-05-004 не применяются.
9. Сметные нормы, приведенные в таблицах с 41-05-001 по 41-05-006, разработаны исходя из следующего состава исполнителей работ (в долях участия в общих затратах труда, в процентах):

┌────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│          Шифр нормы        │Ведущий │Инженер │Инженер │Рабочий │
│                            │инженер │I кате- │III ка- │4 раз-  │
│                            │        │гории   │тегории │ряда    │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│41-05-001-01                │40      │30      │-       │30      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│41-05-001-02                │34      │34      │-       │32      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│41-05-002-01                │-       │72      │-       │28      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│41-05-002-02; 41-05-003-09; │-       │67      │-       │33      │
│41-05-004-02                │        │        │        │        │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│41-05-003-01 - 41-05-003-08 │-       │70      │-       │30      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│41-05-004-01                │-       │73      │-       │27      │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│41-05-005-01                │2       │88      │10      │-       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│41-05-005-02; 41-05-006-03; │-       │100     │-       │-       │
│41-05-006-04                │        │        │        │        │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│41-05-006-01                │3       │87      │10      │-       │
├────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│41-05-006-02                │4       │86      │10      │-       │
└────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Таблица ГЭСНмр 41-05-001

Полное техническое освидетельствование лифта

Измеритель: 1 лифт (норма 1); 1 остановка (норма 2)

41-05-001-01   Полное техническое освидетельствование лифта
               на две остановки
41-05-001-02   За каждую дополнительную остановку больше двух
               добавлять к норме 1

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов затрат  │ Ед.  │41-05-│41-05-│
│ресурса │                                  │измер.│001-01│001-02│
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда исполнителей работ  │чел.-ч│46,31 │4,68  │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-05-002

Периодическое техническое освидетельствование лифта

Измеритель: 1 лифт (норма 1); 1 остановка (норма 2)

41-05-002-01   Периодическое техническое освидетельствование лифта
               на две остановки
41-05-002-02   За каждую дополнительную остановку больше двух
               добавлять к норме 1

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-05-│41-05-│
│ресурса │                                  │измер.│002-01│002-02│
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда исполнителей работ  │чел.-ч│24,64 │2,1   │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-05-003

Частичное техническое освидетельствование лифта
после замены или ремонта оборудования

Измеритель: 1 лифт (нормы 1 - 8); 1 остановка (норма 9)

               Частичное техническое освидетельствование лифта
               на две остановки после:
41-05-003-01   замены канатоведущего шкива (КВШ) лебедки
41-05-003-02   изменения электрической схемы, замены электропроводки
               силовой цепи или цепи управления
41-05-003-03   замены или ремонта лебедки, редуктора,
               тормозного устройства
41-05-003-04   замены системы, шкафа, устройства управления
41-05-003-05   замены тяговых канатов лифта
41-05-003-06   замены или ремонта ловителей
41-05-003-07   замены или ремонта ограничителя скорости
41-05-003-08   замены или ремонта буфера
41-05-003-09   За каждую дополнительную остановку больше двух
               добавлять к нормам 1 - 8

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │41-05-│41-05-│41-05-│41-05-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│003-01│003-02│003-03│003-04│
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│18,46 │14,82 │19,21 │15,49 │
│        │исполнителей работ  │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

┌────────┬────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование  │ Ед.  │41-05-│41-05-│41-05-│41-05-│41-05-│
│ресурса │элементов затрат│измер.│003-05│003-06│003-07│003-08│003-09│
├────────┼────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда   │чел.-ч│18,85 │15,95 │16,56 │15,83 │1,59  │
│        │исполнителей    │      │      │      │      │      │      │
│        │работ           │      │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-05-004

Частичное техническое освидетельствование лифта
после выполнения работ по модернизации

Измеритель: 1 лифт (норма 1); 1 остановка (норма 2)

41-05-004-01   Техническое освидетельствование после выполнения работ
               по модернизации лифта на две остановки
41-05-004-02   За каждую дополнительную остановку больше двух
               добавлять к норме 1

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов затрат  │ Ед.  │41-05-│41-05-│
│ресурса │                                  │измер.│004-01│004-02│
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда исполнителей работ  │чел.-ч│30,84 │1,72  │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-05-005

Техническое диагностирование лифта, отработавшего
назначенный срок службы

Измеритель: 1 лифт (норма 1); 1 остановка (норма 2)

41-05-005-01   Техническое диагностирование отработавшего
               назначенный срок службы лифта на две остановки
41-05-005-02   За каждую дополнительную остановку больше двух
               добавлять к норме 1

┌────────┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │  Наименование элементов затрат   │ Ед.  │41-05-│41-05-│
│ресурса │                                  │измер.│005-01│005-02│
├────────┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда исполнителей работ  │чел.-ч│74,68 │3,44  │
└────────┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-05-006

Обследование металлоконструкций лифта с применением
неразрушающих методов контроля

Состав работ: 01. Неразрушающий контроль металлоконструкций. 02. Подготовка и оформление отчетной документации для экспертного заключения (нормы 1 и 2).

Измеритель: 1 кабина (норма 1); 1 противовес (норма 2); 1 лебедка (норма 3); 1 остановка (норма 4)

               Обследование с применением неразрушающих методов контроля
               металлоконструкций:
41-05-006-01   кабины
41-05-006-02   противовеса
41-05-006-03   лебедки
41-05-006-04   шахты

┌────────┬────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │    Наименование    │ Ед.  │41-05-│41-05-│41-05-│41-05-│
│ресурса │  элементов затрат  │измер.│006-01│006-02│006-03│006-04│
├────────┼────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда       │чел.-ч│16,64 │15,19 │2,18  │1,72  │
│        │исполнителей работ  │      │      │      │      │      │
└────────┴────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Таблица ГЭСНмр 41-05-007

Электроизмерительные работы на лифте

Состав работ:
для нормы 1: 01. Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль". 02. Оформление отчетной технической документации.
для норм 2 и 3: 01. Проверка сопротивления изоляции электрооборудования и электропроводки лифта. 02. Проверка цепей между нулевым проводом ввода и заземленными элементами электрооборудования, находящегося в машинном помещении и в шахте лифта. 03. Измерение сопротивления переходных контактов частей оборудования, подлежащих заземлению и находящихся: на кабине, на верхнем, нижнем посадочных этажах и в приямке лифта, на середине высоты подъема шахты. 04. Проверка сопротивления изоляции цепи освещения шахты. 05. Оформление отчетной технической документации.

Измеритель: 1 лифт (нормы 1, 2); 1 остановка (норма 3)

41-05-007-01   Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"
41-05-007-02   Электроизмерительные работы на лифте на две остановки
41-05-007-03   За каждую дополнительную остановку больше двух добавлять
               к норме 2

┌────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│  Шифр  │   Наименование элементов  │ Ед.  │41-05-│41-05-│41-05-│
│ресурса │          затрат           │измер.│007-01│007-02│007-03│
├────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│1       │Затраты труда рабочих      │чел.-ч│2,38  │52,59 │1,93  │
│1.1     │Средний разряд работы      │      │3,7   │3,7   │3,7   │
└────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘